МАКЕТ 
КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
«ОРГАНИЗАТОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА»
 
 6 уровень квалификации

 

МОСКВА 
2016

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

1	Паспорт комплекта оценочных средств	3 	
1.1	Область применения	3	
1.2.	Инструменты оценки для теоретического этапа экзамена	3	
1.3.	Инструменты для практического этапа экзамена	4	
1.4.	Материально-техническое обеспечение оценочных 
       мероприятий	4	
2	Оценочные средства для профессионального экзамена	4	
2.1.	Оценочные средства для теоретического этапа 
       профессионального экзамена	4	
2.2.	Оценочные средства для практического этапа 
       профессионального экзамена	24	

1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1.1. Область применения
Комплект оценочных средств предназначен для оценки квалификации
 в области организации строительного производства «Общестроительные работы»  
Профессиональный стандарт  «Организатор строительного производства»
(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от «21» ноября 2014 г. № 930н)
Уровень квалификации - 6
1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа  экзамена
Предмет оценки	Критерии оценки 	№  задания	
1.Подготовка строительного производства на участке строительства (код С/01.6) 	
1.1.Требования нормативных технических документов к организации строительного производства.	 1 – правильный;
0 - неправильный 	1-26	
1.2.Технология производства различных видов строительных работ.	1 – правильный;
0 - неправильный	27-37 	
2. Материально-техническое обеспечение строительного производства на участке строительства (код С/02.6)  	
2.1. Входной контроль качества и объема (количества) поставляемых материально технических ресурсов, строительной техники, машин и механизмов, ресурсов поставляемых через внешние инженерные сети.	1 – правильный;
0 - неправильный	38- 50	
2.2. Виды и характеристики основных строительных машин, механизмов, Энергетических установок, транспортных средств	1 – правильный;
0 - неправильный	51-66	
3. Оперативное управление строительным производством на участке строительства (код С/03.6)  	
3.1. Разрабатывать  и контролировать выполнение планов строительного производства на участке строительства	1 – правильный;
0 - неправильный	67-88	
3.2.  Методы определения видов и объемов строительных работ и производственных заданий	1 – правильный;
0 - неправильный	89- 97	
4.  Внедрение системы менеджмента качества на участке строительства (код С/06.6)   	
4.1.  Требования законодательных актов, нормативных правовых и нормативных технических документов в области технического регулирования в строительстве	1 – правильный;
0 – неправильный	98- 104	
5.  Обеспечение соблюдения на участке строительства правил и норм по охране труда, требований пожарной безопасности и охраны окружающей среды (код  С/08.6)	
5.1. Требования нормативных правовых актов в области охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, требований промышленной безопасности.	1 – правильный;
0 - неправильный	105- 117	
6 . Руководство работниками  участка строительства (код С/09.6)	
6.1. Определение потребности в трудовых ресурсах при производстве однотипных работ	1 – правильный;
0 - неправильный	118-130	

Общая информация по структуре комплекта оценочных средств:
Количество заданий с выбором ответа: 130
Количество заданий с открытым ответом: 0
Количество заданий на установление соответствия: 0 
Количество заданий на установление последовательности:0  
Время выполнения теоретического этапа экзамена:  2 час
1.3. Инструменты для практического этапа экзамена
Предмет оценки	Критерии оценки 	Тип и количество заданий	
1	2	3	
Трудовая функция.
Оперативное управление строительным производством на участке  строительства
Трудовое действие.
 Ведение текущей и исполнительной документации
по производственной деятельности участка строительства	 Соответствие требованиям к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения РД-11-02-2006.	 Практическое задание № 1   	
Трудовая функция.
Оперативное управление строительным производством на участке  строительства
Необходимые умения.
Определять виды и сложность, рассчитывать объемы строительных работ и  производственных заданий  в соответствии с имеющимися материально-техническими  ресурсами, специализацией подрядных организаций, специализацией и квалификацией  работников участка строительства	Соответствие методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004
	Практическое задание №2

1.4. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий
 Компьютерный класс, сеть «Интернет».
  
2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

2.1 Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена
Задания с выбором 1 правильного ответа

1.Подготовка строительного производства на участке строительства (код С/01.6)	
1.1.Требования нормативных технических документов к организации строительного производства.	
1.	Кто согласовывает контрольные цифры объемов работ по генподряду и субподряду?	1. начальники участков и субподрядные организации;
2. субподрядные организации;
3. руководитель и главный инженер организации.	
2.	Должен ли план каждого из участков быть равным сумме планов, входящих в состав планов участков прорабов?
	1. да;
2. нет;

3.	 Какие показатели определяются документами оперативного планирования?
	1. очередность поставок машин и механизмов, материалов, изделий и конструкций, выделение рабочей силы;
2. потребное количество машин, рабочей силы;
3. комплекты поставок материально-технических ресурсов. 	
4	Представляются ли недельно-суточные графики производства работ субподрядным организациям для ознакомления?
	1. обязательно с целью разработки собственных графиков;
2. не предоставляются;
3. только в случае выполнения сложных технологических процессов.	
5.	Предоставляются ли недельно-суточные графики производства работ органам материально-технического обеспечения?
	1. обязательно;
2. не предоставляются;
3. только при возведении сложных объектов.
	
6.	Кто должен оборудовать строительную площадку, расположенную на городской территории, средствами очистки или мойки колес транспортных
средств?      		1. организация,  осуществляющая строительство;      
2. заказчик;
3. организация - владелец транспортных средств.
     		
7.	Какими документами оформляется ввод в эксплуатацию для нужд строительства временных зданий и сооружений, расположенных на стройплощадке или на территории, используемой застройщиком?	1. актом или записью в журнале работ;
2. не требуется оформление документов; 
3. договором подряда на выполнение строительных работ;
4. протоколом.    		
8. 	Каким образом  осуществляется приемка  рабочей документации  передаваемой лицу, осуществляющему строительство? 
      		1. входной контроль:
2. получение рабочей документации;
3. изучение рабочей документации.
     		
9. 	Кто утверждает проект производства работ?
	1. руководитель организации, выполняющей строительство; 
2. руководитель проектной организации;
3. представитель заказчика.	
10.	Какой должен быть срок выполнения входного контроля рабочей документации со стороны лица, осуществляющего строительство?
	1. устанавливается договором;
2. десять дней;
3. один месяц.
    		
11	Каким нормативным документом определяются зоны действия опасных и вредных производственных факторов, связанные с технологией и условиями производства работ при использовании грузоподъемных машин?	1. согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;                                         2. СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;                                                           3. СП 56.13330.2011 «Производственные здания».	
12	Каким выражением определяется грузоподъемность крана (Q)?	1.Q ≥ Ргр. + Ргр.пр. + Рн.м.пр. + Рк.у;                                                   2.Q <Ргр. + Ргр.пр. + Рн.м.пр. + Рк.у;                                                     3. Q ≥ Ргр. + Ргр.пр. + Рн.м.пр.	
13	Приемка разбивочной геодезической основы у заказчика-застройщика осуществляется на основании?	1. акта приемки;                                                        2. акта осмотра;                             
3. акта передачи.	
14	Какие виды водопонижения используются для защиты котлованов и траншей от подземных вод?	1. скважинный водозабор и устройство вертикальной планировки;
2.открытый водоотлив;
3. скважинный водозабор, дренажи, лучевой водозабор и открытый водоотлив.	
15	Какими могут быть дренажи строительного назначения? 	1. линейными, смешанными;                                             2. горизонтальными, пластовыми;                                          3. смешанными;                                      
4. линейными, пластовыми.	
16	Какова величина отклонения отметок дна выемок в местах устройства фундаментов и укладки конструкций при окончательной разработке?	1.  ±5 см.;                                                
2.  ±10 см.;                                
3.  ±15 см.	
17	На каком расстоянии от подземных стальных трубопроводов с внутренним давлением не более 2 МПа. допускается погружение свай сечением 40х40 см.?	1. 3 м.;                            
2. менее 5 м.;                     
3. более 5 м.	
18	Каково решение исполнителя при обнаружении в сваях поперечных и наклонных трещин шириной раскрытия более 0,3 мм	1. сваи должны быть демонтированы и заменены новыми;                                           
2. сваи должны быть усилены стальными обоймами;                       
3. сваи должны быть усилены железобетонной обоймой с толщиной стенок не менее 100 мм. заменены дублерами.                                             	
19	Допускается ли правка деформированных металлических конструкций?	1. не допускается;                              
2. допускается только по согласованию с автором проекта;          
3. допускается холодная правка или правка с предварительным нагревом.               	
20	Кем должно приниматься решение об исправлении, усилении поврежденных металлических конструкций или замене их новыми?	1. авторами чертежей марки металлические конструкции; 
2. технадзором заказчика-застройщика;                                            3. руководителем генподрядной организации.	
21	Каким документом должна сопровождаться каждая партия болтов, гаек и шайб для монтажных соединений стальных конструкций? 	1. сертификатом качества;
2. паспортом;                                         
3. накладной.	
22	Укажите верный нормативный документ для «Несущих и ограждающих конструкций»?	1. СП 70.13330.2012;                           
2. СП 45.13330.2012;                       
3. СНиП 3.03.01-87.	
23	Можно ли разравнивать или перераспределять слой бетонной смеси вибраторами?	1. запрещается;                                        
2. допускается; 
3. допускается при снижении частоты и амплитуды вибраций.	
24	Какова величина заглубления вибратора в ранее уложенный слой бетонной смеси?	1. 5-10 см.;                                           
2. 10-15 см.;                                    
3. 15-20 см.	
25	Соответствие каким требованиям устанавливают при операционном контроле качества бетонной смеси?	1. соответствие условиям договора, технологического регламента, проводят испытания по определению нормируемых технологических показателей качества бетонных смесей;                  
2. соответствие режимов бетонирования конструкций и условий твердения бетона предусмотренным в проекте производства работ и технологическом регламенте;      
3. соответствие фактических показателей качества бетона конструкций всем нормируемым проектным показателям качества бетона.	
26	Соответствие каким требованиям устанавливают при приемочном контроле качества бетонной смеси?	1. соответствие условиям договора,   технологического регламента,  проводят испытания по определению нормируемых технологических показателей качества бетонных смесей;                    
2. соответствие режимов бетонирования конструкций и условий твердения бетона предусмотренным в проекте производства работ и технологическом регламенте;         
3. соответствие фактических показателей качества бетона конструкций всем нормируемым проектным показателям качества бетона.	
1.2.Технология производства различных видов строительных работ.	
27	Для каких объектов проект производства работ разрабатывается в полном объеме? 
	1. для всех сложных объектов;         
2. для объектов на городской территории, территории действующего предприятия, при строительстве в сложных условиях;                                   
3. для всех объектов, при возведении которых применяются механизированные процессы;                                                 4. для сложных объектов нового строительства и реконструкции действующих производств.	
28	Приведите полный объем проекта производства работ.
	1. календарный план производства работ, стройгенплан, графики движения рабочих кадров и строительных машин, график поступления конструкций, изделий, материалов и оборудования, технологические карты, схемы размещения геодезических знаков, пояснительная записка;      
2. календарный план работ, стройгенплан, технологические карты, графики движения рабочих кадров и строительных машин, пояснительная записка;        
3. пояснительная записка, стройгенплан, технологические карты.	
29	На какой срок выдается наряд-допуск на выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов.	1. на десять рабочих дней;          
2. на один месяц;                      
3. на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ.	
30	При каких условиях допускается возведение каменных конструкций вышележащего этажа?	1. при укладке перекрытий возведенного этажа, анкеровке  и замоноличивании швов между плитами перекрытий;                     
2. при укладке   перекрытий возведенного этажа, анкеровки;                                                   3. при укладке   перекрытий возведенного этажа,  замоноличивания швов между плитами перекрытий. 	
31	При устройстве карнизов свес каждого ряда кирпичной кладки должен составлять не более….	1. 1/3 длины кирпича;                 
2. 1/2 длины кирпича;            
3. 1/4 длины кирпича.	
32	Какая допускается высота возведения здания из кирпича в зимний период способом замораживания?	1. допускается более 15 м.;                                    2. более  4 этажей; 
3. не выше 3 этажей, не выше 10 м.;                                                    4. не выше 15 м., не выше 4 этажей.	
33	Что входит в схемы операционного контроля?	1. состав операций и нормативно-технические документы;
2. требования к качеству применяемых материалов, указания по производству работ, порядок и последовательность контроля; 
3. состав операций,  средства контроля,  технические требования, требования к качеству применяемых материалов, указания по производству работ.	
34	Укажите правильный порядок возведения ограждающих каменных конструкций?	1.выкладываются верстовые ряды, затем забутка;                         
2. выкладываются верстовые ряды параллельно с забуткой;  
3. выкладывается забутка, затем верстовые ряды.	
35	Каким может быть материал, используемый для дистанционных прокладок-«сухарей» при устройстве арматурного каркаса?	1. металлические подкладки либо бетон той же марки, что и бетонируемая конструкция;                    2. прокладки из кирпича или щебня;                               3. из бетона той же марки, что и бетонируемая конструкция, пластмассовые изготовленные в заводских условиях.	
36	 Перед бетонированием конструкции следует…	1. установить опалубку, смонтировать арматурные каркасы, установить закладные детали;                                           
2. выполнить геодезические работы по разбивке, проверить качество арматуры и закладных деталей, установить арматурные каркасы и опалубку.	
37	Укажите правильную последовательность выполнения работ при монтаже наружных стеновых панелей?	1.установка панелей, устройство оклеечной воздухоизоляции, установка теплоизоляционного вкладыша, замоноличивание стыка;                                                     2. установка панелей, установка теплоизоляционного вкладыша, устройство оклеечной воздухоизоляции, замоноличивание стыка;                                                  
3. установка панелей, установка теплоизоляционного вкладыша, замоноличивание стыка,                                                устройство оклеечной воздухоизоляции.	
2. Материально-техническое обеспечение строительного производства на участке строительства (код С/02.6)	
2.1. Входной контроль качества и объема (количества) поставляемых материально технических ресурсов, строительной техники, машин и механизмов, ресурсов поставляемых через внешние инженерные сети.	
38	Организация материально-технического обеспечения включает в себя: 	1. определение потребности строительства в материалах и оборудовании, приобретение, комплектация материалов и оборудования, своевременное обеспечение строящихся объектов материалами и оборудованием, организация складского хозяйства;  
2. организация централизованных поставок материалов и оборудования на объекты капитального строительства, обеспечение сохранности  и экономии материальных ресурсов;
3. организация закупок материальных ресурсов и своевременное обеспечение строящихся объектов материалами и оборудованием, нормирование расходов и запасов материалов, организация складского хозяйства, обеспечение сохранности и экономии материалов.	
39	Потребность в материалах и оборудовании осуществляют по… 	1. сметным нормам расхода материалов,   или на основе установленных норм расхода материальных ресурсов;
2. спецификациям на материалы и оборудование;
3. ведомостям расхода материалов.	
40	Отпуск материалов сверх установленного лимита допускается только… 	1. с разрешения руководства строительной организации;
2. с разрешения начальника участка;
3. по согласованию с заказчиком.	
41	Общий объем нормативных запасов в материалах, изделиях и конструкциях включает…	1. текущий, подготовительный, гарантийный запасы;
2. суточный, декадный, страховой запасы;
3.сменный, суточный, месячный запасы.	
42	Текущий запас создает условия в период… 	1.бесперебойной работы строительно-монтажной организации;
2.  удовлетворения потребности строительства в период приемки, разгрузки, комплектации, сортировки и лабораторного анализа материалов, изделий и конструкций;
3. компенсации возможных перебоев в доставке материалов, изделий и конструкций вследствие неравномерной работы транспорта и нарушения договорных сроков их поставки. 	
43	Подготовительный запас предназначен для…  	1.  удовлетворения потребности строительства в период приемки, разгрузки, комплектации, сортировки и лабораторного анализа материалов, изделий и конструкций;
2.бесперебойной работы строительно-монтажной организации;
3.   компенсации возможных перебоев в доставке материалов, изделий и конструкций вследствие неравномерной работы транспорта и нарушения договорных сроков их поставки. 	
44	 Гарантийный (страховой) запас необходим для… 	1.   компенсации возможных перебоев в доставке материалов, изделий и конструкций вследствие неравномерной работы транспорта и нарушения договорных сроков их поставки;
 2.  удовлетворения потребности строительства в период приемки, разгрузки, комплектации, сортировки и лабораторного анализа материалов, изделий и конструкций;
3. бесперебойной работы строительно-монтажной организации.
	
45	Выберите ответ правильно описывающий виды контроля качества строительства.	1. входной контроль материалов и изделий, технологический контроль, геодезический контроль, лабораторный контроль;
2. входной контроль, операционный контроль, приемочный контроль, контроль геодезической основы, контроль соответствия основных конструкций требованиям;
3. контроль документации, контроль материалов и изделий, выборочный контроль, контроль устройства технических средств;
4. входной контроль проектной документации, освидетельствование геодезической разбивочной основы, входной контроль материалов и изделий, операционный контроль, освидетельствование скрытых работ, освидетельствование ответственных конструкций и участков систем инженерно-технического обеспечения, испытание им опробование технических устройств.	
46	Выберите правильный ответ для решения задачи входного контроля проектной документации.
	1. оценка решений и комплектности проектной документации;
2. анализ проектной и рабочей документации (комплектность, соответствие размеров и геодезической основы, наличие согласований и утверждений, ссылки на нормативные документы и др.);
3. проверка достоверности расчетных параметров, комплектности документации.	
47	Выберите правильный ответ для решения задачи входного контроля материалов и изделий.
	1. проверка наличия сопроводительных документов поставщика;
2. контрольные измерения,  при необходимости испытания показателей материалов, и изделий;
3. соответствие показателей качества материалов и изделий требованиям нормативных документов.
	
48	Выберите правильный ответ определяющий состав документов устанавливающих соответствие показателей качества материалов и изделий?	1. стандартам, техническим условиям (техническим свидетельствам), а также сопровождающим документам, подтверждающим качество;
2. проектной и рабочей документации прошедшей экспертизу;
3. договорам подряда.	
49	Какие меры принимаются в случае обнаружения материалов и изделий, не соответствующих требованиям?
	1. возврат материалов и изделий со штрафными санкциями;
2. дополнительное согласование с застройщиком и проектировщиком;
3. замена материалов и изделий, доведение их до требуемых показателей, согласование на применение с застройщиком и проектировщиком.	
50	Какие функции выполняются при оценке соответствия отдельных конструкций?
	1. анализ актов скрытых работ и геодезической исполнительной схемы;
2. проверка достоверности геодезической исполнительной схемы;
3. проверка актов скрытых работ, геодезической исполнительной схемы и рассмотрение протоколов испытания конструкций, оговоренных в проектной документации (договоре).	
2.2.  Виды и характеристики основных строительных машин, механизмов, энергетических установок, транспортных средств	
51	Что является нормокомплектом для отдельных видов работ и специальностей рабочих?
  
	1. материалы, изделия и строительные конструкции;
2. строительные машины и оборудование;
3. технологический комплект средств малой механизации, инструмента и оснастки.
     		
52	По каким основным показателям осуществляется выбор монтажного крана при возведении зданий и сооружений? 
	1. скорости и высоте подъема груза, мощности силовых двигателей, стоимости машиносмены или механизированного процесса;
2. производительности, грузоподъемности, диаметру опорных колес, удельному расходу топлива или электроэнергии при выполнении производственных процессов;
3. грузоподъемности, вылету стрелы, высоте подъема крюка, стоимости машиносмены или механизированного процесса;
4. наличия автоматизированных систем защиты от перегрузки, возможности ограничения поворота стрелы, обзорности с рабочего места машиниста монтажного крана. 
	
53	Какая   привязка крана  и  подкрановых  путей  должны учитываться при возведении зданий и сооружений  грузоподъемными  кранами? 	1. конечная и промежуточная;
2. поперечная  и  продольная;
3. поперечная, продольная и вертикальная.
     	
54	  В каком организационно-технологическом документе должен содержаться график движения основных строительных машин по объекту? 	1. проект организации строительства;
2. проект производства работ;
3. проектно-сметной документации.	
55	Какое минимально допустимое расстояние от выступающей части грузоподъемного крана до габарита строящегося здания на высоте менее двух метров?
 	1. 0,5 м.;
2. 0,7 м.;
3. 1,0 м.
     	 	
56	  Какое минимально допустимое расстояние от выступающей части грузоподъемного крана до габарита строящегося здания на высоте более двух метров?
     
	1. 1,2 м.;
2. 0,8 м.;
3. 0,4 м.
     	 	
57	Чем обусловлена зона обслуживания (рабочая зона) грузоподъемного крана?  
     	 	1. максимальным  вылетом  стрелы  крана;
2. наибольшей массой груза на минимальным  вылете стрелы крана;
3. наибольшей массой груза.  
	
58	Что считается опасной зоной при эксплуатации строительных машин, имеющих подвижные рабочие органы?
	1. зона работы  машины, граница которой находится на расстоянии не менее 3 м от предельного положения рабочего органа;
2. зона работы  машины, граница которой находится на расстоянии не менее 5 м. от предельного положения рабочего органа;
3. зона работы  машины, граница которой находится на расстоянии не менее 7 м от предельного положения рабочего органа;
4. зона работы машины, граница которой находится на расстоянии не менее 10м. от предельного положения рабочего органа.     		
59	Какие основные показатели должны учитываться при сравнительной  оценки  вариантов  механизации  и  выбора  из  них  наилучшего?  
	1. стоимость  используемых производственных фондов, себестоимость, трудоемкость и продолжительность  выполнения  механизированных  работ;
2. виды и продолжительность  выполнения  механизированных  работ, используемые основные фонды.      		
60	  Какими дорожными знаками и указателями должно регулироваться движение автотранспортных средств на территории строительной площадки?	1. специальными знаками и указателями;
2. общепринятыми дорожными знаками и указателями;
3. дорожными знаками и указателями, разработанными для строящегося объекта.	
61	Каким образом должны быть обозначены опасные зоны, которые могут возникнуть во время работы строительных машин?
	1. инвентарными защитными ограждениями;
2. знаками безопасности и (или) предупредительными надписями;
3. сигнальными ограждениями.
	
62	Какие должны предусматриваться  наиболее эффективные мероприятия при выполнении  работ в охранной зоне воздушной линии электропередачи? 
	1. назначение ответственного лица для контроля производственного процесса в охранной зоне воздушной линии электропередачи;
2. установка знаков безопасности или предупредительных надписей;
3. снятие напряжения с воздушной линии электропередачи.
	
63	  Какое необходимое условие должно выполняться при перемещении, установке и работе машин, а также транспортных средств вблизи выемок (котлованов, траншей, канав и т.п.) с неукрепленными откосами?
	1. ограничение действия динамических нагрузок на грунт при перемещении, установке, работе машин и транспортных средств;
2. перемещение, установка и работа машин, а также транспортных средств за пределами призмы обрушения грунта на расстоянии, установленном организационно-технологической документацией;
3. устройство демпфирующих элементов для снижения колебаний, передающихся на грунт от перемещения, установке и работе машин, а также транспортных средств.	
64	Какое минимальное расстояние должно  быть от  края  проезжей  части  автомобильной  дороги  до  ограждения строительной площадки?  	1. 1,5 м.;
2. 2,0 м.;
3. 2,5 м.
     		
65	Какое минимальное расстояние должно  быть от экскаватора  до  разрушаемой  конструкции здания при его сносе?  
	1. в полтора раза превышающее высоту разрушаемой  конструкции здания;
2. на минимальную длину рабочего органа экскаватора;
3. не  менее  высоты разрушаемой  конструкции здания.      		
66			
3. Оперативное управление строительным производством на участке строительства (код С/03.6)	
3.1. Разрабатывать  и контролировать выполнение планов строительного производства на участке строительства	
67	Укажите  основные  документы  оперативного планирования?
	1. квартальные и месячные планы, декадные и недельно-суточные графики;
2. декадные  планы  и  суточные  графики;
3. квартальные  планы  с  помесячной  разбивкой  показателей  объема  работ  и  сроков  их  выполнения.
	
68	Какие показатели определяются документами оперативного планирования?
	1. потребное количество машин, рабочей силы;
2. очередность поставок машин и механизмов, материалов, изделий и конструкций, выделение рабочей силы;
3. комплекты поставок материально-технических ресурсов.	
69	 	 	
70	Какие документы подготавливаются органами материально  технического обеспечения на основе графиков производства работ?	1. графики комплектации и поставки материальных ресурсов;
2. графики и ведомости потребности в ресурсах;
3. планы поставок материальных ресурсов.	
71	Из каких составляющих формируется  общий  производственный запас материалов и изделий для возведения объекта?  
	1. текущего, подготовительного и гарантийного (страхового) запасов;
2. общего, частного и гарантийного (страхового) запасов;
3. текущего и страхового  запасов.	
72	Какая документация  в составе проектов  производства  работ может в наиболее полном объеме регламентировать сроки поставок и номенклатуру комплектов в части материально-технического обеспечения для объектов строительства?
 	1. график потребности  строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования;
2. проектно - сметная документация;
3. унифицированная  нормативно-технологическая  документация  по  комплектации.	
73	Для каких целей создается оперативно-диспетчерское управление?
	1. для взаимоувязки, учета и регулирования работы строительных организаций, органов материально-технического обеспечения и транспортных организаций;
2. для контроля и учета материально-технического обеспечения и выполнения строительно-монтажных работ;
3. обеспечивает взаимодействие генподрядной и субподрядных строительных организаций.	
74	Из каких частей состоит система оперативно-диспетчерского управления?
	1. структурной, функциональной, информационной, технической;
2. функциональной, технической;
3. структурной, функциональной, технической.	
75	Укажите состав оперативной информации.
	1. плановые задания по строительству, распоряжение по их корректировке, сведения о ходе выполнения работ за сутки и неделю;
2. недельно-суточный план, график поставки материально-технических ресурсов;
3. графики движения рабочих кадров и машин, планы суточных и недельных объемов.	
76	На какую информацию подразделяется оперативная информация?
	1. периодическую  и текущую информацию;
2. плановую и фактическую информацию;
3. информация, поступающая в течение суток и информация итоговая за сутки.	
77	Какими документами определяется периодическая информация?	1. недельно-суточными графиками, графиками обеспечения объектов материальными ресурсами;
 2. приказами и распоряжениями руководства, данными фактического состояния объектов;
3. протоколами взаимодействия участников строительства, сводными рапортами.		
78	Укажите временной лаг текущей информации	1. сутки (смена);
2. неделя;
3. декада.	
79	Раскройте содержание текущей информации.
	1. необеспеченность фронтов ресурсами, нарушение сроков поставки ресурсов, отсутствие строительной техники, аварии и т.д.;
2. продолжительность смены, частота и продолжительность простоев, фронта и ритма работы бригад;
3. нарушения техники безопасности, отсутствие соответствующей документации.	
80	Какая информация содержится по итогам работы подразделения 
за неделю?		1. за каждые сутки;
2. за каждую смену;
3. за каждый день.	
81	Какая информация содержится по итогам работы подразделения 
за  сутки?
		1. итоги работы подразделений и субподрядных организаций, степень готовности объекта, причины отклонения сроков;
2. сбои в материально-техническом обеспечении, все виды нарушений и штрафов;
3. продолжительность смены, частота и продолжительность простоев, фронта и ритма работы бригад.		
82	Укажите основные требования к передаваемой информации.

 	1. краткость, достоверность,  полнота информации;
2. краткость и достоверность и скорость передачи информации;
3. полнота информации.	
83			
84	Укажите  разработчика  оперативных  планов.	1. производственно-технический  отдел;
2. начальник  участка, прораб, мастер.
3. планово-экономический отдел. 	
85	Какие  показатели  включает  оперативный  месячный  план  строительной  организации?	1. укрупненные показатели, планируемые по участкам старших прорабов,  отдельно по заказчикам, участкам, объектам и этапам  работ;
2. объемы  строительно-монтажных  работ, этапы работ по  генподряду, потребность в материалах, изделиях  и  конструкциях, потребность  в  машинах;
3. объемы работ генподрядной и субподрядных организаций;
4. объемы работ генподрядной организации.	
86	Какие  показатели  включает  оперативный месячный план прораба?
	1. объемы строительно-монтажных работ в натуральном и стоимостном  выражении, сроки  выполнения, численность рабочих, фонд заработной платы, потребность в материально-технических ресурсах;
 2. объем  строительно-монтажных  работ, сроки  выполнения  работ, фонд  заработной  платы;
3. объем  и  сроки  выполнения  строительно-монтажных  работ,  потребность  в  материалах  и изделиях, потребность  в  машинах.	
87	Какие показатели  включает  оперативный месячный план  участка?
	1. в  дополнение  к  показателям,  планируемым  по  участкам  прорабам,  разрабатываются  показатели  объемов  работ  по  генподряду  с  разбивкой  по  собственным  силам  и  силам  субподрядчиков;
2. объемы  и  сроки  выполнения строительно-монтажных работ, фонд  заработной  платы,  потребности  в ресурсах;
3. объемы  строительно-монтажных работ, сроки их выполнения, численность  рабочих,  фонд  заработной  платы.		
88			
3.2.  Методы определения видов и объемов строительных работ и производственных заданий	
89	При расчете состава бригады определяют:	1. комплекс работ, поручаемых бригаде,
трудоемкость работ, входящих в комплекс, калькуляцию затрат труда по профессиям и разрядам рабочих, рациональное совмещение профессий;
2.  продолжительность выполнения работ выполняемых ведущей машиной,  численный состав звеньев и бригады, профессионально-квалификационный состав бригады;
3. комплекс работ, трудоемкость, продолжительность, численный и квалифицированный состав бригады.	
90	При расчете составов бригад рекомендуется соблюдать следующие положения:
	1. определение численного  состава специалистов, бригады не должны сниматься с объекта до полного завершения соответствующих видов работ;
2. учитываться квалификационные требования к рабочим с учетом выработки (с учетом роста производительности труда) рабочих каждой профессии;
3. численный состав бригад, должен быть стабильным, бригады не должны сниматься с объекта до полного завершения соответствующих видов работ, выработка рабочих каждой профессии должна быть задана и оставаться неизменной на плановый период работы.	
91	По функциональному назначению мобильные здания подразделяются на 

	1. бытовые, производственные, столовые;
2.складские, бытовые, вспомогательные;
3. производственные, складские, вспомогательные.	
92	Каким образом проводят расчет вместимости зданий отдельно по каждой номенклатуре?
	1. от общего числа работающих; 
2. системы нормативных показателей обслуживания; 
3. на базе графика движения рабочей силы, системы нормативных показателей обслуживания.	
93	Каким образом определяют потребность в материалах и оборудовании?
	1. по спецификациям проектно-сметной документации;  
2.на основе установленных норм расхода материальных ресурсов;
3. по сметным нормам и на основе установленных норм расхода материальных ресурсов.	
94	Каким путем проводится приемка материальных ресурсов?
	1. путем визуального осмотра и инструментальной проверки;
2. путем приемки на склад с последующим оформлением учетной документации в установленном порядке;
3. путем проверки количества, комплектности и качества продукции.	
95	Каким наиболее рациональным способом является доставка материалов и изделий в зону рабочего места?
	1. грузоподъемными механизмами;
2. с использованием средств малой механизации;
3. контейнерный способ и пакетирование.	
96	Профессионально-квалификационный и количественный состав бригад устанавливается в зависимости.	1. от фактических объемов и механизации строительных работ;
2. от фактических объемов и сроков выполнения работ;
3. от планируемых объемов, трудоемкости и сроков выполнения работ.	
97	Численный состав бригады определяется по формуле.	1.     

2.   	
4.  Внедрение системы менеджмента качества на участке строительства (код С/06.6)	
4.1.  Требования законодательных актов, нормативных правовых и нормативных технических документов в области технического регулирования в строительстве	
98	Что является объектом технического регулирования?
	1. особо опасные объекты;
2. объекты определенные в градостроительном кодексе;
3. здания и сооружения любого назначения;
4. только инженерные сети.	
99	Какие уровни ответственности зданий и сооружений?
	1. 1 категории, 2 категории, 3 категории;
2. особо опасные объекты, технически сложные и уникальные объекты;
3. повышенный, нормальный, пониженный..	
100	Какие предъявляются требования к безопасному уровню возведения зданий и сооружений на окружающую среду?
	1. исключение техногенных процессов;
2. исключение негативных явлений воздействия на человека;
3. в процессе их строительства и эксплуатации не возникло угрозы оказания негативного воздействия на окружающую среду.	
101	Какие требования должны быть учтены по продолжительности инсоляции?	1. в течение 4 часов в определенный период;
2. в течение теплого времени года длительно;
3. в жилых помещениях должна быть обеспечена достаточная продолжительность инсоляции и солнцезащита в целях создания безопасных условий проживания независимо от срока.	
102	Какие предъявляются требования к безопасному уровню возведения зданий и сооружений на окружающую среду?	1. исключение техногенных процессов;
2. исключение негативных явлений воздействия на человека;
3. в процессе их строительства и эксплуатации не возникло угрозы оказания негативного воздействия на окружающую среду.
 	
103	Какой организацией обеспечивается технически исправное состояния строительных машин, инструмента, технологической оснастки, средств коллективной защиты работающих	1. организациями, на балансе которых они находятся
2. генподрядной организацией;
3. субподрядной организацией.	
104	К зонам потенциально опасных производственных факторов следует относить:	1. места вблизи строительной площадки;
2. места вблизи работающих грузоподъемных строительных машин и механизмов, места где возможно превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны;                                                        3. места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок, места вблизи от не ограждённых перепадов по высоте 1,3 м и более, места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ.	
5.  Обеспечение соблюдения на участке строительства правил и норм по охране труда, требований пожарной безопасности и охраны окружающей среды (код  С/08.6)	
5.1. Требования нормативных правовых актов в области охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, требований промышленной безопасности.	
105	К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов относятся:	1. места вблизи строительной площадки;
2. места вблизи работающих грузоподъемных строительных машин и механизмов, места где возможно превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны;
3. места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок, места вблизи от не ограждённых перепадов по высоте 1,3 м и более, места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ.	
106	Соответствие требованиям охраны и безопасности труда, производственных территорий, зданий и сооружений, участков работ и рабочих мест вновь построенных или реконструируемых промышленных объектов…	1. определяется при приемке их в эксплуатацию;
2. определяется проектной документацией;                                                             3. определяется в процессе выполнения строительно-монтажных работ.	
107	Кто отвечает за обеспечение охраны труда при выполнении конкретных работ и на рабочих местах	1. мастер;
2. начальник участка;                                                        3. руководитель отдела охраны труда.	
108	На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены.	1. защитные ограждения;
2. сигнальные ограждения;
3. знаки безопасности.	
109	Каков порядок действия работников при обнаружении нарушений норм и правил охраны труда?	1. принять меры к их устранению собственными силами, в случае невозможности этого прекратить работы;
2. прекратить работы и информировать должностное лицо;
3. принять меры по устранению норм и правил, в случае невозможности этого прекратить работы и информировать должностное лицо.	
110	Какими средствами должны быть обеспечены участки работ и рабочие места?	1. необходимыми средствами   индивидуальной защиты;
2. . необходимыми средствами коллективной защиты, первичными средствами пожаротушения;
3. средствами связи и сигнализации;
4. необходимыми средствами коллективной и индивидуальной защиты, первичными средствами пожаротушения, средствами связи и сигнализации.	
111	Материалы, изделия, конструкции и оборудование при складировании на строительной площадке и рабочих местах должны укладываться в соответствии с требованиями…	1. СНиП 12-03-2001;
2. СНиП 12-04-2002;
3. СНиП 3-01-87.
	
112	Съемные грузозахватные приспособления и тара, не прошедшие технического осмотра, 	1. не должны находиться в местах производства работ;
2. могут храниться  на месте производства работ;
3. могут использоваться при производстве работ.	
113	Каким документом определяется порядок действия людей на пожаре?
	1. СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений";
2. устав пожарной охраны;
3. правила пожарной безопасности в РФ;
4. ГОСТ 12.1.004-91* "Пожарная безопасность. Общие требования".	
114	 Каким нормативным документом регламентируются требования к охране окружающей среды при проектировании и строительстве. 
	1. Закон Российской Федерации «Об экологической экспертизе»;
2. Закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды»;
3. Закон Российской Федерации «Об особо охраняемых природных территориях»;
4. Земельный кодекс Российской Федерации.	
115	Допускается ли ввод объекта в эксплуатацию при не выполнении мероприятий по охране окружающей среды?
	1.  нет;
2. да;
3. допускается ввод в эксплуатацию при наличии гарантийного письма о выполнении мероприятий.
	
6 . Руководство работниками  участка строительства (код С/09.6)	
6.1. Определение потребности строительного производства на участке строительства в трудовых ресурсах	
116	Укажите  разработчика  оперативных  планов.
	1. производственно-технический  отдел;
2. начальник  участка;
3. прораб, мастер.
	
117	Назовите результаты пространственного членения промышленного комплекса (объекта).
	1.  очередь, пусковой комплекс, узел, участок, захватка;
2. участок, захватка, делянка;
3.  узел, участок, захватка.
	
118	Укажите персонально ответственных за строительство, должностных лиц назначаемых распорядительными документами (приказами) участниками строительства (юридическими лицами)
	1. ответственный представитель строительного контроля застройщика (заказчика), ответственный производитель работ от подрядчика (генподрядчика), ответственный представитель от проектировщика, в случае, когда выполняется авторский надзор;
2. ответственный представитель инвестора, ответственный представитель субподрядной организации, ответственный представитель от проектировщика, в случае, когда выполняется авторский надзор;
3. ответственный производитель работ от подрядчика (генподрядчика), 
представитель строительного контроля органов местного самоуправления,
ответственный представитель строительного контроля застройщика (заказчика);
4. ответственный представитель инвестора, представитель строительного контроля органов местного самоуправления, ответственный представитель субподрядной организации, ответственный представитель строительного контроля застройщика (заказчика).	
119	С какой целью создаются комплексные бригады?
	1. для производства законченной строительной продукции;
2. для выполнения значительного объема работ;
3.  для строительства сложных объектов.	
120	От каких параметров зависит количественный и профессионально-
квалификационный состав бригад?
	1. от планируемых объемов, трудоемкости и сроков выполнения работ; 
2. от отраслевой специфики и объема работ;
3. от объема и сроков выполнения работ.	
121	Укажите процент трудоемкости работ, выполняемых в порядке совмещения.
	1. 15%;
2. 5%;
3. 10%;
4. 20%.	
122	Какие формы организации труда применяются мобильными строительными организациями?
	1. вахтовая, экспедиционная, экспедиционно-вахтовая;
2. вахтовая, экспедиционная;
3. экспедиционно-вахтовая.	
123	Из каких частей состоит система оперативно-диспетчерского управления?
	1. структурной, функциональной, информационной, технической;
2. функциональной, технической;
3. структурной, функциональной, технической.	
124	Что определяют при расчете состава бригады?	1.количественный состав бригады по профессиям и разрядам рабочих, рациональное совмещение профессий;
2.  продолжительность выполнения работ выполняемых ведущей машиной,  численный состав звеньев и бригады, профессионально-квалификационный состав бригады,  наличие и укомплектованность бытовыми и подсобными помещениями;
3. комплекс работ, трудоемкость, калькуляцию затрат труда, продолжительность выполнения работ выполняемых ведущей машиной,  численный состав звеньев и бригады, квалификационный состав бригады.	
125	Какие положения следует соблюдать при расчете составов бригад?
	1. определение численного  состава специалистов, бригады не должны сниматься с объекта до полного завершения соответствующих видов работ;
2. учитываться квалификационные требования к рабочим с учетом выработки (с учетом роста производительности труда) рабочих каждой профессии;
3. численный состав бригад, должен быть стабильным, бригады не должны сниматься с объекта до полного завершения соответствующих видов работ, выработка рабочих каждой профессии должна быть задана и оставаться неизменной на плановый период работы.	
126	По функциональному назначению мобильные здания подразделяются на:
	1. бытовые, производственные, столовые;
2.складские, бытовые, вспомогательные;
3. производственные, складские, вспомогательные.	
127	На основании чего проводят отдельно по каждой номенклатуре расчет вместимости зданий?
	1. от общего числа работающих; 
2. системы нормативных показателей обслуживания,  
3. на базе графика движения рабочей силы, системы нормативных показателей обслуживания.	

Ключ к тесту

№№ задания	Правильные варианты ответа, модельные ответы и (или) критерии оценки	Вес задания или баллы, начисляемые за верный ответ	
1		1 – правильный; 0 - неправильный	
2		1 – правильный; 0 - неправильный	
3		1 – правильный; 0 - неправильный	
4		1 – правильный; 0 - неправильный	
5		1 – правильный; 0 - неправильный	
6		1 – правильный; 0 - неправильный	
7		1 – правильный; 0 - неправильный	
8		1 – правильный; 0 - неправильный	
9		1 – правильный; 0 - неправильный	
10		1 – правильный; 0 - неправильный	
11		1 – правильный; 0 - неправильный	
12		1 – правильный; 0 - неправильный	
13		1 – правильный; 0 - неправильный	
14		1 – правильный; 0 - неправильный	
15		1 – правильный; 0 - неправильный	
16		1 – правильный; 0 - неправильный	
17		1 – правильный; 0 - неправильный	
18		1 – правильный; 0 - неправильный	
19		1 – правильный; 0 - неправильный	
20		1 – правильный; 0 - неправильный	
21		1 – правильный; 0 - неправильный	
22		1 – правильный; 0 - неправильный	
23		1 – правильный; 0 - неправильный	
24		1 – правильный; 0 - неправильный	
25		1 – правильный; 0 - неправильный	
26		1 – правильный; 0 - неправильный	
27		1 – правильный; 0 - неправильный	
28		1 – правильный; 0 - неправильный	
29		1 – правильный; 0 - неправильный	
30		1 – правильный; 0 - неправильный	
31		1 – правильный; 0 - неправильный	
32		1 – правильный; 0 - неправильный	
33		1 – правильный; 0 - неправильный	
34		1 – правильный; 0 - неправильный	
35		1 – правильный; 0 - неправильный	
36		1 – правильный; 0 - неправильный	
37		1 – правильный; 0 - неправильный	
38		1 – правильный; 0 - неправильный	
39		1 – правильный; 0 - неправильный	
40		1 – правильный; 0 - неправильный	
41		1 – правильный; 0 - неправильный	
42		1 – правильный; 0 - неправильный	
43		1 – правильный; 0 - неправильный	
44		1 – правильный; 0 - неправильный	
45		1 – правильный; 0 - неправильный	
46		1 – правильный; 0 - неправильный	
47		1 – правильный; 0 - неправильный	
48		1 – правильный; 0 - неправильный	
49		1 – правильный; 0 - неправильный	
50		1 – правильный; 0 - неправильный	
51		1 – правильный; 0 - неправильный	
52		1 – правильный; 0 - неправильный	
53		1 – правильный; 0 - неправильный	
54		1 – правильный; 0 - неправильный	
55		1 – правильный; 0 - неправильный	
56		1 – правильный; 0 - неправильный	
57		1 – правильный; 0 - неправильный	
58		1 – правильный; 0 - неправильный	
59		1 – правильный; 0 - неправильный	
60		1 – правильный; 0 - неправильный	
61		1 – правильный; 0 - неправильный	
62		1 – правильный; 0 - неправильный	
63		1 – правильный; 0 - неправильный	
64		1 – правильный; 0 - неправильный	
65		1 – правильный; 0 - неправильный	
			
67		1 – правильный; 0 - неправильный	
68		1 – правильный; 0 - неправильный	
			
70		1 – правильный; 0 - неправильный	
71		1 – правильный; 0 - неправильный	
72		1 – правильный; 0 - неправильный	
73		1 – правильный; 0 - неправильный	
74		1 – правильный; 0 - неправильный	
75		1 – правильный; 0 - неправильный	
76		1 – правильный; 0 - неправильный	
77		1 – правильный; 0 - неправильный	
78		1 – правильный; 0 - неправильный	
79		1 – правильный; 0 - неправильный	
80		1 – правильный; 0 - неправильный	
81		1 – правильный; 0 - неправильный	
82		1 – правильный; 0 - неправильный	
			
84		1 – правильный; 0 - неправильный	
85		1 – правильный; 0 - неправильный	
86		1 – правильный; 0 - неправильный	
87		1 – правильный; 0 - неправильный	
			
89		1 – правильный; 0 - неправильный	
90		1 – правильный; 0 - неправильный	
91		1 – правильный; 0 - неправильный	
92		1 – правильный; 0 - неправильный	
93		1 – правильный; 0 - неправильный	
94		1 – правильный; 0 - неправильный	
95		1 – правильный; 0 - неправильный	
96		1 – правильный; 0 - неправильный	
97		1 – правильный; 0 - неправильный	
98		1 – правильный; 0 - неправильный	
99		1 – правильный; 0 - неправильный	
100		1 – правильный; 0 - неправильный	
101		1 – правильный; 0 - неправильный	
102		1 – правильный; 0 - неправильный	
103		1 – правильный; 0 - неправильный	
104		1 – правильный; 0 - неправильный	
105		1 – правильный; 0 - неправильный	
106		1 – правильный; 0 - неправильный	
107		1 – правильный; 0 - неправильный	
108		1 – правильный; 0 - неправильный	
109		1 – правильный; 0 - неправильный	
110		1 – правильный; 0 - неправильный	
111		1 – правильный; 0 - неправильный	
112		1 – правильный; 0 - неправильный	
113		1 – правильный; 0 - неправильный	
114		1 – правильный; 0 - неправильный	
115		1 – правильный; 0 - неправильный	
116		1 – правильный; 0 - неправильный	
117		1 – правильный; 0 - неправильный	
118		1 – правильный; 0 - неправильный	
119		1 – правильный; 0 - неправильный	
120		1 – правильный; 0 - неправильный	
121		1 – правильный; 0 - неправильный	
122		1 – правильный; 0 - неправильный	
123		1 – правильный; 0 - неправильный	
124		1 – правильный; 0 - неправильный	
125		1 – правильный; 0 - неправильный	
126		1 – правильный; 0 - неправильный	
127		1 – правильный; 0 - неправильный	

Правила обработки результатов и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу экзамена:
Решение о допуске к сдаче практической части принимается на основании определения итогового балла, который должен составлять не менее 127 из 127 максимально возможных.

 2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена

ЗАДАНИЕ 1 НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Трудовая функция: Оперативное управление  строительными  работами на объекте капитального строительства
Трудовое действие (действия): Ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым видам  строительных работ
                                              
Типовое задание:  Заполнить общий журнал работ, журналы на отдельные виды работ, исполнительные  схемы, акты скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций.
Формы документов и исходные данные приведены в Приложение № 1 
Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания: Учебная аудитория экзаменационного центра.
2. Максимальное время выполнения задания: 4 час.                                                                          3. Вы можете воспользоваться: Компьютер, принтер.   	

Критерии оценки 	

 Соответствие требованиям к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиям предъявляемым к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения РД-11-02-2006.	

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции 3.3.3. «Оперативное управление производством однотипных строительных работ», необходимые умения «Ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым видам однотипных строительных работ» принимается при условии выполнения 8 практических заданий из 8 возможных.

ЗАДАНИЕ 2 НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Трудовая функция:  Оперативное управление строительным производством на участке  строительства
Необходимые умения: Определять виды и сложность, рассчитывать объемы строительных работ и  производственных заданий  в соответствии с имеющимися материально-техническими  ресурсами, специализацией подрядных организаций, специализацией и квалификацией  работников участка строительства.
Типовое задание:  Определить объемы земляных выемок, определить объемы бетонных, монтажных и каменных работ, определить объемы кровельных, плотничных, отделочных  работ и работ по устройству полов.
Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания: Учебная аудитория экзаменационного центра.
2. Максимальное время выполнения задания: 2 час.                                                         3. Вы можете использовать: компьютер, принтер.   
 	
Критерии оценки 	

Соответствие методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004	

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции 3.3.3. «Оперативное управление строительным производством на участке  строительства», необходимые умения: «Определять виды и сложность, рассчитывать объемы строительных работ и  производственных заданий  в соответствии с имеющимися материально-техническими  ресурсами, специализацией подрядных организаций, специализацией и квалификацией  работников участка строительства» принимается при условии выполнения 3 практических заданий из 3 возможных.